한강버스 선착장 신축공사

우선협상대상자(시공사) 선정 공고 입찰안내서

본 입찰공고는 서울주택도시공사와 ㈜이크루즈가 공동으로 출자하여 설립된 주식회사 한강버스 (이하 “(주)한강버스”라 한다)를 대신하여 한강버스 선착장 신축공사 사업참여자를 선정하고자 아래와 같이 우선협상대상자를 공모합니다.

1. 공사개요

가. 공사명: 한강버스 선착장 신축공사

나. 위치 및 개요

- 마곡 ~ 잠실 구간 선착장 7개소[현장설명서 및 입찰안내서 참조]

다. 하부체면적:　400㎡(2EA), 600㎡(5EA)

라. 신축 예정규모: 지상1개층(2개소), 지상3개층(5개소)

마. 신축 예정연면적: 6,518.79㎡(7개소)

※ 상기개요는 사업추진에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 현장설명서 참조

구 분	한강버스 선착장
위 치	마곡 ~ 잠실 (7개 선착장)
전체규모	마곡 ~ 잠실선착장 구간 총 25.8km 선착장 부대시설 7개소
공사기간	2024.07 ~ 2024.11
사업개요	구 분	40X10 TYPE	40X15 TYPE
	용 도	승객대기시설, 매점, 화장실	승객대기시설, 화장실, 매점, 카페, 레스토랑
	층 수	단층 (총 1개층)	2층 (중층 포함 총 3개층)
	연면적	163.02㎡	1,238.55㎡
	위 치	마곡/옥수	망원/여의도/잠원/뚝섬/잠실
	개소	2개소	5개소

바. 공사기간 : 계약일로부터 123일(약 4개월)

※ 하절기 공사 중지 등 공사불능기간, 점용허가(안전도 검사 등) 기관 협의 기간 포함함.

※ 사업 목적 달성을 위하여 필요한 경우 상호 협의하여 공사기간을 조정할 수 있음. 단, 상호 협의 없이 당초 정해진 기간 내에 공사를 완료하지 아니한 때에는 매 지체일수 마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부해야함

사.  추정금액 : 20,000,000,000원~23,000,000,000원(VAT포함)

※ 우선협상대상자 선정 후 협의를 통해 공사계약금액은 공사내역서 기반으로 계약 체결
[예정(공사내역의 원가계산서 × 비율(낙찰률 등)]

ㅇ 포함 사업비

- 건축/기계/공사, 승강기 설치공사, 옥외기계, 전기공사, 정보통신공사, 인테리어공사(승객대기시설), 소방, 가스, 각종 부(분)담금, 폐기물처리비, 하자보수비, 각종 시운전비, 각종 수수료 및 인증비용, 각종 평가‧점검‧시험비, 기타 제잡비, 현장 가설방음벽 등 각종 가설공사비, 건설공사 준공 및 점용허가(승인)에 필요한 일체의 비용, 계약상대자의 일반관리비용 등을 포함한 기타비용(시공상세도 포함), ㈜한강버스가 제시한 설계 및 시공 기준에 따른 소요비용 등

2. 입찰방법 및 입찰참여 자격기준

가. 입찰방법:　일반경쟁 적격심사방식

나. 입찰참가자격

① 관계 법령에 허가ㆍ인가ㆍ면허 등을 받았거나 등록ㆍ신고 등을 하였거나 해당 자격요건에 적합할 것

② 파산, 해산, 영업정지, 부도상태에 있는 자(법원의 회생절차개시 결정이 있는 경우 포함)는 입찰에 참가할 수 없음(부정당업자의 입찰 참가자격 제한에 해당되지 아니할 것)

3. 현장설명회

가. 현장설명서로 갈음

4. 입찰일정 및 제출서류

가. 참여공고: 2024년 7월 01일(월)

나. 도서공개: 2024년 7월 03일(수) 15시

나. 참여마감: 2024년 7월 10일(수) 15시

다. 개찰일시: 2024년 7월 12일(금)

라. 제출방법: 서울특별시 강남구 개포로 621 서울주택도시공사 12층 한강기획부

마. 제출서류:

① 입찰참여신청서

② 계량부분 자기평가서 및 붙임 증명서

③ 공동수급표준협정서

④ 수행계획(서) 7부(인쇄)

⑤ 기타첨부서류

바. 상기 입찰일정은 사업추진에 따라 변경 될 수 있음.

5. 입찰참가자격

가. 입찰참가자격

① 관계 법령에 허가ㆍ인가ㆍ면허 등을 받았거나 등록ㆍ신고 등을 하였거나 해당 자격요건에 적합할 것

② 파산, 해산, 영업정지, 부도상태에 있는 자(법원의 회생절차개시 결정이 있는 경우 포함)는 입찰에 참가할 수 없음(부정당업자의 입찰 참가자격 제한에 해당되지 아니할 것)

◯ 건설공사(건축,토목,기계,소방)

가. 소득세법 제168조, 법인세법 제111조 또는 부가가치세법 제8조에 따라 해당 사업에 관한 사업자등록증을 발급받거나, 고유번호를 부여받은 경우로, 건설산업기본법 시행령 별표5에 해당하는 기술자를 보유한 업체로서 아래의 면허를 보유하여야 함

- 건산법에 의한 『건축공사업』또는 『토목건축공사업』

◯ 건설공사(소방, 전기, 정보통신)

가. 분리발주예정이며, 입찰서 제출 시 소방공사, 전기공사 및 정보통신 공사금액은 포함

나. 건설공사(건축 등) 시공자는 소방공사, 전기공사 및 정보통신공사 계약금액을 확정과 업체를 추천하고 발주자는 해당 업체와 수의계약 시행함(계약금액은 추정금액내에 포함)

6. 공동도급

가. 공동도급 시 공동이행방식의 공동도급이 가능함(붙임3 참고)

※ 구성원별 계약참여 최소지분율은 30%이상으로 하여야 함

나. 여러개의 법인(개인사업자 포함)의 대표자가 동일인인 경우 1개 법인(개인사업자 포함)만 공동수급체에 참여하여야 함(공동수급 업체를 중복적으로 결성하여 입찰 참여 불가)

다. 공동수급협정서 제출일 현재 부도‧파산‧해산‧영업정지 등의 상태에 있는 업체는 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여할 수 없음

7. 낙찰자 결정 방법

가. 적격심사(수행능력) 60%, 건설공사 수행계획(서) 40%의 합산점수가 가장 높은 업체를 우선협상자로 선정하고 예산범위 이내로 가격협상 후 낙찰자를 결정

① 낙찰자 선정을 위한 평가는 수행능력평가(60점), 수행계획(40점)으로 총 100점으로 구성됨

② 수행계획(서)은 16페이지 내로 작성[별도 수행계획(서) 양식 확인]

③ 수행계획(서)에는 입찰참여 업체를 확인하거나 구별할 수 있는 문구나 그림은 포함 할 수 없음

※ 제3항의 내용을 위반할 경우 총점에서 감점 3점 처리

나. 입찰에 응하는 자가 7인을 넘을 경우, 사전심사를 통해 적격심사 평가(60%)기준으로 가장 높은 점수 순으로 6인을 우선 선정 후 수행계획서 평가를 진행함
※ 사전심사는 참여마감 후 즉시 시행하고, 결과 통보 예정

① 사전심사 중 동점자로 인해 6인이 초과 될 수 있음.(예, 6위가 동점자인 경우)

다. 수행계획서 평가는 수행계획평가(심사)위원회에 의결에 따라 평가함

라. 총점이 같을 경우 건설공사실적 금액이 많은 자를 낙찰자 선정함

마. 입찰참가자가 평가에 대하여 필요한 자료를 제출하지 않았거나, 자료를 제출한 경우라도 점수를 부여할 수 없는 경우 당해 평가 내용에 대하여는 “0점”으로 처리할 수 있음

바. 수행능력 및 경영상태 분야의 평가는 입찰참가자가 공동도급으로 신청한 경우에는 구성원의 참여 비율에 따라 전원을 평가

구분

해당

배점

수행능력 평가

(주1,2 참조)

가. 최근 3년 간 해당공사(추정가격: 200억원(VAT포함) 기준)와 업체별 건설공사 실적금액(관급･지급자재비 제외)의 비율에 해당하는 등급점수로 산정

100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상
15.0	13.5	12.0	10.5	9.0

30점

(정량)

나 기술자보유현황

1) 해당업종 경력기술자

3.6 이상	2.4 이상 3.6 미만	1.2 이상 2.4 미만	1.2 미만
8.0	7.0	5.0	0

2) 일반기술자

15인 이상	12인 이상 15인 미만	10인 이상 12인 미만	10인 미만
7.0	5.0	3.0	0

경영상태 평가

(주3 참조)

가. 부채비율(부채총계/자기자본)

50% 미만	50%이상 75% 미만	75%이상 100% 미만	100%이상 125% 미만	125% 이상
15.0	13.5	12.0	10.5	9.0

나. 유동비율(유동자산/유동부채)

150% 이상	120% 이상 150% 미만	100%이상 120% 미만	70% 이상 100% 미만	70% 미만
15.0	13.5	12.0	10.5	9.0

30점

(정량)

소계(A)

60

구분

해당

배점

수행계획

평가항목	세부사항	배점	평가내용(상대평가)
현장조직의 구성	건설현장 인력투입 및 배치계획	5	○ 현장대리인 및 분야별 기술자 배치계획 - 건축·기계 등 참여기술자 조직도 ○ 현장별 적정 인력 투입계획 ○ 공종별 협력업체 투입계획 제시
건설공사 세부 수행계획	수상 부유식 건축공법 세부 수행계획	5	○ 수상 부유식 건축물 시공에 따른 예상 문제점 및 대책
	품질관리대책	4	○ 시공방법(공법) ○ 현장별 균질한 품질관리 방안
	공정관리대책	7	○ 제시된 공기 내 건설공사 이행 계획 및 공기 단축방안 제서 ○ 제작 및 설치에 장시간 소요되는 자재, 장비, 설비는 미리 발주계획 제시 ○ 현장별․공종별 공정표 제시
	안전관리대책	5	○ 장마철, 태풍 등 우기 시공에 따른 자연재해에 대비한 안전관리 방안 ○ 수상 작업에 따른 구체적 안전대책
	기타 자유제안	4	○ 기타 본 건설공사 수행에 도움이 될 수 있는 특수공법 등 자유 제안 ○ 설계오류 또는 설계변경 제안

현장 대리인 발표	건설공사 수행계획 발표 및 질의응답	10	○ 건설공사 수행계획서 발표 - 발표시간은 10분, 질의·응답 12분 내외 ※ 수행계획서 양식 참조

40점
(정성,위원회)

소계(B)

40

총계(A+B)

100

주1) 최근 3년간 시공실적 평가방법

가) 최근 3년간 시공실적 평가 시 실적계수는 해당 공사의 평가기준금액 [(추정가격+부가가치세)×5] 대비 구성원 각각의 실적금액에 시공비율을 곱하여 합산한 실적금액으로 산정한다.

▪ 실적계수 =	실적합계(A업체) × 시공비율 + 실적합계(B업체) × 시공비율····
	｛(추정가격 + 부가가치세) × 5｝

※ 시공비율 : 공동수급체 구성원(이하 “구성원”이라 한다)이 각각 시공할 비율을 말하며 각 구성원의 시공경험, 기술능력, 경영상태 등을 평가하는데 활용한다.

※ 시공실적: 입찰공고일을 기준으로 관련협회에서 확정된 최근연도부터 역산하여 3년간 실적을 연도단위(1. 1～12.31)로 인정·평가하며 협회에서 증명서 발급이 곤란하여 발주자로부터 직접 증명서를 발급받는 경우에도 동일하다.

주2) 기술자 보유상황 및 배치예정 품질·안전기술자의 경력 평가

가) 건설기술자의 종류와 보유내용은 건설기술자보유증명서에 따르고, 해당업종 경력기술자, 일반기술자의 증명은 한국건설기술인협회 등 관련협회 확인서에 따름

나) 경력기술자 평가방법

① 첨부 별지 제1호의 일반기술자로서 해당공사와 동일하거나 유사한 종류의 공사현장에 3년 이상(자격취득 전·후 포함) 종사한 기술자는 다음 기술자 등급계수, 경력계수 및 관리능력계수를 곱하여 산정하며, 기술자는 종류별 ․ 등급별 및 참여기간 등을 중복 산정하지 아니함

㉮ 등급계수 : 특급기술자 1.0, 고급기술자 0.75, 중급기술자 0.5, 초급기술자 0.25

㉯ 경력계수 : 3년 이상 5년 미만 1.0, 5년 이상 10년 미만 1.5, 10년 이상 2.0

㉰ 관리능력계수(현장대리인 경력) : 2년 미만 1.0, 2년 이상 5년 미만 1.1, 5년 이상 1.3

② 건설기술자의 등급구분은 건설기술진흥법령 등에 따라 설립된 한국건설기술인협회, 전력기술인협회 등 관련기관의 기술자 등급 구분을 기준으로 함

다) 기술자 보유상황은 주 공사(업종)를 대상으로 평가

라) 기술자 평가는 중복산정하지 아니함

마) 공동수급체의 평가방법

① 해당공사(업종) 경력기술자는 구성원별로 “나)”의 평가방법에 따라 산출된 결과에 시공비율을 곱한 후 합산하여 평가 함

② 일반기술자 평가는 각 구성원의 기술자 보유수에 시공비율을 곱하여 합산한 기술자수를 기준으로 평가 함

주3) 경영상태 평가방법

가) 평가요소별 업종전체평균비율 적용은 입찰공고일 기준 가장 최근에 관련협회에서 조사·통보한 최종연도 비율을 원칙으로 하되, 평균비율이 없는 심사항목은 배점한도를 취득한 것으로 함

나) 평가결과 부(-)의 수치가 나타난 경우에는 최저등급으로 평가함

다) 구성원이 부도 등의 상태인 경우에는 해당구성원을 제외한 잔여구성원만으로 평가하고, 공동수급체 대표자가 부도 등의 상태인 경우에는 그 공동수급체를 적격자 선정에서 제외 함. 다만, 부도업체에 대한 법원의 회생절차개시결정이 있는 경우 평가 시 포함함

8. 입찰의 무효

가. 입찰참가의 자격이 없는 자가 참가한 입찰이나, 입찰서가 그 도착일시까지 소정의 입찰장소에 도착하지 아니한 입찰

나. 동일한 사항에 동일인이 2통 이상 입찰서를 제출한 입찰(공동도급인의 경우에는 공동수급체를 중복으로 결성하여 입찰에 참여한 경우 포함)

다. 입찰안내서를 따르지 않거나, 위반하는 사항의 입찰은 무효로 함

라. 입찰신청서를 서위로 작성 제출한 경우

9. 안전계약 특수조건 및 안전관련 법령 등 준수의무

가. 입찰에 참가하는 자는「중대재해처벌법」,「산업안전보건법」등에서 정한 안전보건관리 확보의무를 숙지하고 입찰에 응하여야 함

	안전 및 보건확보 의무사항(중대재해처벌법)
1) 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건 관리체계의 구축 및 그 이행 2) 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행 3) 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행 4) 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

나. 계약상대자(공동도급사 포함)는 계약체결 시 ‘안전보건관리 실천 서약서’를 제출하여야 하며, 공사이행 전 기간에 걸쳐 안전계약 특수조건 및 관련규정에서 정한 안전보건 확보 의무사항을 이행하여야 함

10. 하도급 관련사항

가. 낙찰을 받은 원도급자(공사계약자)는 하도급대금을「건설산업기본법」,「하도급대금거래 공정화에 관한 법령」등 관계법령상 하도급 대금지급 준수 규정에 따라 지급하여야 하고 계약담당자의 하도급 공사대금 지급 및 수령 확인에 적극 응하여야 하며, 하도급 대금지연 지급 또는 부당지급 할 경우에는 관계법령에 따라 행정 제재와 처분을 받게 됨

나. 건설공사 하도급계약의 당사자는 대등한 입장에서 합의에 따라 공정하게 계약을 체결 하고 공정거래위원회에서 권장하는 건설공사 표준하도급계약서 사용을 원칙으로 함.   특히 원도급자는 대금의 적기 지급 및 하도급자의 보호를 위하여 적극 노력하여야 함

다. 건설장비 임대시에는 건설기계임대차 표준계약서를 사용하여야 한다

라.「하도급거래공정화에 관한 법률 제14조 및 동법 시행령 제9조」,「건설산업기본법 제35조 제2항제2호 내지 제5호 및 동법 시행규칙 제29조」에 해당될 경우에는 하도급 대금을 직접 지급할 수 있음.

마. 계약상대자는 하도급계약 체결 및 통보 시 불공정 부당특약 내용 유무를 확인 후 「불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서」를 제출하여야 한다.

11. 청렴계약이행 및 근로자 권리보호 서약서 등 제출

가. 본 입찰에 참가하는 자는 모두 「근로자 권리보호를 위한 근로자 권리보호 서약서」를 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 서약서를 제출한 것으로 간주함

12. 기타사항

가. 현장대리인은 입찰공고일 현재 재직중인 자를 선임하여야 함

나. 설계도서의 열람은 서울주택도시공사 웹하드의 해당폴더를 참조하시기 바람
※ 설계도서는 사업일정 등의 사유로 2024년 7월 3일 업로드 예정

다. 설계, 시공, 입찰공고 및 적격심사에 관한 질의사항은 아래 우리공사 웹하드 질의 폴더에 서면(내리기 전용 폴더 내 질의양식 이용)으로 제출하여 주시기 바람

‧ 「한강버스 선착장 신축공사」폴더 참조

‧ 질의마감일 : 2024.07. 4.(목) (17:00까지)

‧ 답변일 : 2024.07.08.(월) 일괄 답변

(입찰업무의 공정성을 위하여 유선 개별질의는 받지 않음)

라. 서울주택도시공사 웹하드 이용 방법

‧ 웹하드 주소 : https://webhard.i-sh.co.kr (게스트 체크)

‧ Guest ID : chaesh@i-sh.co.kr  PW : sh1234

※ 입찰참가자는 추후 웹하드를 통해 공지하는 입찰관련 공지사항 및 질의 응답사항(질의하지 않은 업체도 확인 필수)을 수시로 확인하여 입찰에 불이익이 없도록 조치하여야 함

마. 본 공사의 ㈜한강버스 요청에 의하여 계약자는 국토교통부 건설산업지식정보시스템(www.kiscon.net), 건설행정시스템 세움터(www.eais.go.kr), 서울시 건설알림이 및 건설정보관리시스템(One-PMIS,http://pmis.eseoul.go.kr)에 관련 자료를 등재하고 관리하게 할 수 있음을 확인하고 입찰에 참여하시기 바람

바. 입찰자는 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서 및 청렴계약이행 특수조건 등 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지한 후 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못함으로써 일어나는 모든 책임은 입찰자에게 있음

사. 본 공사는 현장설명은 현장설명서로 갈음하며, 현장설명 내용에 관한 사항은 입찰공고시 제공한 모든 자료(현장설명서, 설계도서 등)로써 해당공사의 공사내용을 충분히 숙지하시고 입찰하여 주시기 바람

아. 시공실적 확인을 위한 추가 서류 요청시에 응하지 않을 경우 해당 실적은 없는 것으로 함

자. 본 공고 및 입찰참여 안내서에 명시되지 아니한 사항은 ㈜한강버스가 결정한 사항에 따르며, 이의제기 할 수 없음

카. 본 공사의 입찰관련 내용은 서울주택도시공사 인터넷 홈페이지【http://www.i-sh.co.kr】또는 주식회사 이크루즈 인터넷 홈페이지 【http://www.elandcruise.com 에서 확인할 수 있음

타. 문의사항

- 입찰공고문, 수행계획심사 관련 사항 : 한강기획부(02-3410-8599)

- 공종별 설계 및 시공에 관한 사항  : 현장설명서 ‘담당자 및 연락처’ 참조

2024. 7.  1.

주식회사 한강버스